Извещение
о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
1. В период с	«	01	»	Июня		2022	г. по «	01	»	Декабря		2022	г., в отношении	
объектов недвижимости, расположенных на территории:  
Новосадовского сельского поселения   в границах кадастрового квартала 31:15:0802003,
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
                     с  муниципальными контрактами от 01.06.2022 № 01263000291220004210001.

заключенным со стороны заказчика:                Администрации Белгородского района

почтовый адрес:                                   308007, г. Белгород, ул. Шершнева, 1а

адрес электронной почты:	kizo@be.belregion.ru	номер контактного телефона:	8(4722) 26-63-25	
со стороны исполнителя: ИП Болычев Олег Константинович;
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера Болычев Олег Константинович                       ; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:   СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»	;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:                                                                   1908	;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:                                           06.12.2016 г	;

почтовый адрес:                    305023, г. Курск, ул. Литовская, д.12 а, оф.204	;

адрес электронной почты:                                                oleg.bolychev@imbox.ru	;

номер контактного телефона:                        +7-910-273-13-13	.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время выполнения работ	Место выполнения работ	Виды работ	

с 01.06.2022г. по 01.07.2022г.
	
г. Белгород
	Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН	

с 01.06.2022г. по 01.07.2022г.

г. Белгород
	Сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории	

с 01.06.2022г. по 01.07.2022г.
	
г. Белгород
	Получение координат исходных пунктов геодезической сети	
с 06.06.2022г. по 06.09.2022г.
09:00 – 16:00
(ежедневно, в рабочие дни), а также в выходные дни  25.06.2022г.	Белгородская область, Белгородский район, территория  п. Новосадовый Новосадовского сельского поселения - 31:15:0802003.	Полевые работы	
не позднее 06.09.2022 г.	г. Курск, ул. Литовская, д.12 а, оф.204	Разработка проекта карты-плана территории	
не позднее 21.11.2022 г.	Белгородский район,                     
п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова 1	Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии в установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке	
не позднее 01.12.2022 г.	г. Курск, ул. Литовская, д.12 а, оф.204	Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции (с учетом актов согласования местоположения границ, заключений согласительной комиссии) и представление его на утверждение Муниципальному заказчику на бумажном носителе	
не позднее 01.12.2022 г.	г. Курск, ул. Литовская, д.12 а, оф.204	Подготовка и предоставление Муниципальному заказчику карты-плана территории в форме электронного документа для представления в орган регистрации прав с включением в состав карты-плана территории сведений об утверждении карта-плана территории	

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгородского района